Ⅰ		망상웰빙휴양타운 조성

▢ 사업목적

ㅇ 2018 평창동계올림픽 유치, 환동해권 국제여객항로 이용객 증가, 내륙

교통망 개선 등으로 새로운 관광수요 지속 증가

ㅇ 동해안권 웰빙형 관광 패러다임의 변화에 능동적으로 대처하고 변화

를 선도해 나갈 수 있는 융복합형 『휴양□관광□체험단지』조성

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2013 ~ 2016년(4년)

○ 위    치 : 동해시 망상해변 일대

○ 사업내용 : 야영장 데크, 조경, 전기시설, 전통한옥, 문화체험공간 등

○ 2013년 사업비 : 14억 (국7, 도2.1, 시4.9)

▢ 추진상황

○ 웰빙휴양타운 조성사업 기본계획 용역 발주 : ‘13. 5 ~ ’14. 12

○ 가족야영체험장 기반시설 실시설계 용역 완료 : ‘13. 5. 27 ~ 9. 26

○ 가족야영체험장 기반시설 공사 계약 원가심사의뢰: ‘13. 9. 27~11. 4

○ 가족야영체험장 기반시설 공사 추진 : ‘13. 12 ~ ’14. 9

▢ 기대효과

○ 2018 평창동계올림픽 관광수요 흡수, 국제적 수준의 휴양지로 발돋움

○ 동해항 국제여객항로 활성화와 연계 외국 관광객 유치 증대

○『동해안권 경제자유구역』 개발 촉진

○ 동북아 환동해권 『웰빙/힐링 거점 휴양단지』 기능 확대

▢ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년
사업비	4,000			1,400	2,600

Ⅰ		망상∼노봉간 녹색경관길 조성공사

▢ 사업목적

망상해변 일원의 관동팔경 녹색경관길을 새로운 관광자원으로 개발하여

묵호항등과 연계관광 구축

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2011 ∼ 2013

○ 위    치 : 동해시 망상해변 일원

○ 사업내용 : 경관길 조성 L= 990m, B= 10m

○ 2013년 사업비 : 1,740백만원(국비 870 도비 261 시비 609)

▢ 추진상황

○ 사업착공 : 2013. 4. 1

○ 사업준공 : 2013. 12. 26

▢ 기대효과

○ 망상에서 노봉간 녹색경관길 준공으로 망상해변 접근성 향상에 따른

관광 활성화 기여

○ 기존 망상 관광지 및 웰빙휴양타운과 연계된 걷는길 관광지 자원으로서

새로운 여건 개선

▢ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년
사업비	4,070	730	1,600	1,740

Ⅰ		망상해변 전투수영장∼노봉해변간 파제형산책로 조성공사

▢ 사업목적

망상해변 일원의 국내 최적의 사계절 체류형 휴양.레저 복합관광지

조성을 통한 지역발전 도모

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2009 ∼ 2013

○ 위    치 : 동해시 해변 일원

○ 사업내용 : 파제형 산책로 조성 L= 1.7km

○ 2013년 사업비 : 1,100백만원(국비 550 도비 165 시비 385)

▢ 추진상황

○ 사업착공 : 2013. 4. 1

○ 사업준공 : 2013. 10. 30

▢ 기대효과

○ 망상 해변 상가 주민의 소득증대와 동해시민의 휴양등 삶의 질 향상에

기여하고 관광시설 확충등과 연계하여 지역 활성화에 기여

▢ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년
사업비	6,000	2,300	1,600	1,100

Ⅰ		호해정(할미바위 주변) 일원 해파랑길 조성공사

▢ 사업목적

“길”을 테마로 한 생활문화 관광자원 개발을 통한 관광자원개발과

해안 연결망 구축 및 해변 유휴자원의 관광 명소화로 지역발전 도모

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2011 ∼ 2013

○ 위    치 : 동해시 망상동 ∼ 추암동 일원

○ 사업내용 : 해파랑길 조성 산책로 조성 L= 24.4km

○ 2013년 사업비 : 300백만원(국비 150 도비 30 시비 120)

▢ 추진상황

○ 사업착공 : 2013. 4. 1

○ 사업준공 : 2013. 11. 30

▢ 기대효과

○ 명품길 관광자원 개발로 인한 관광객 유치 증대 효과

○ 해안에 어울리는 산책로 조성으로 주변 경관 및 환경 개선 효과

▢ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년
사업비	1,200	400	500	300

Ⅰ		가세 해변 산소길 조성공사

▢ 사업목적

강원 산소길을 해안선을 따라 연결망을 구축 함으로서 해변 유휴자원   의 관광 명소화로 지역발전 도모

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2011 ∼ 2013

○ 위    치 : 동해시 망상동 ∼ 추암동 일원

○ 사업내용 : 산소길 조성 L= 24.4km

○ 2013년 사업비 : 100백만원(국비 50 도비 15 시비 35)

▢ 추진상황

○ 사업착공 : 2013. 4. 1

○ 사업준공 : 2013. 9. 30

▢ 기대효과

○ 해안 유휴지를 명품길 관광자원 개발로 인한 관광객 유치 증대 효과

○ 기존 관광지와 연계한 산책로 조성으로 주민소득에 기여

▢ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년
사업비	220		120	100

Ⅰ		수산물유통센터 건립

▢ 사업목적

○ 수산물유통센터 확충을 통한 수급 조절 기능 강화로 어가소득 향상

○ 고품격의 수산물 소비시장 확충으로 시장변화 대처, 어촌경제 안정화

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2011~2014년(4년)

○ 위    치 : 동해시 묵호동 15-85(묵호항 내)

○ 시설규모 : 1동(건축면적 2,502.06㎡ / 지상 5층)

○ 사 업 비 : 7,350백만원(국비3,675 도비1,102 시비2,352 자담221)

○ 주요시설 : 1∼3층) 수산물 판매시설 등, 4∼5층) 전망대

▢ 추진상황

○ 기본 및 실시설계 완료 : 2013. 1. 15

○ 착    공 : 2013. 7. 30

○ 4 ~ 5층 전망대 골조공사(철근□거푸집 조립 및 타설 반복) 중  ※ 공정율 : 75%

▢ 향후계획

○ 건물 준공 및 시험가동 : 2014. 11 ~ 12월

○ 준공(개장)식 : 2014. 12월

▢ 기대효과

○ 묵호항 재개발 및 주변정비와 연계 관광객 유치로 수산물 소비촉진

○ 수산물 유통단계 축소로 어업인 소득증대 및 어촌경제 활성화

○ 수산물의 수급 및 공급기능 강화로 안정적 판로기반 확보

▢ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년
사업비	5,800	544	1,360	3,896

Ⅰ		수산물처리저장시설 건립

▢ 사업목적

○ 노후 냉동□냉장□제빙시설(1962년 시설)의 내부낙석 발생(붕괴위험)

및 효율적 능률적 수산물저장시설과 제빙작업 지난

○ 수산물 유통□판매를 위한 수급조절로 어가안정 및 어업인 소득증대 기여

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2011~2013년(3년)

○ 위    치 : 동해시 묵호동 15-85(묵호항 내)

○ 시설규모 : 1동(건축면적 2,979.9㎡ / 지상 5층)

○ 사 업 비 : 6,407백만원(국비3,000 도비600, 시비2,220 자담 587)

○ 주요시설 : 1∼3층) 수산물 판매시설 등, 4∼5층) 전망대

▢ 추진상황

○ 기본 및 실시설계 완료 : 2013. 1. 15

○ 착    공 : 2012.10.15

○ 준    공 : 2014. 1.22

▢ 기대효과

○ 효율적 어업생산활동 지원과 수산물의 신속한 처리로 안정적 어업생산기반 마련

○ 수산물 수급조절 저장을 통한 어가유지로 어업인 소득증대 기여

▢ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년
사업비	6,407	400	2,600	3,407

Ⅰ		수산물산지가공시설

▢ 사업목적

○ 현대적 수산물 가공시설 신축 및 위생시설(HACCP도입) 구축

○ 특화된 수산물 산지가공시설 확충으로 수산가공업 경쟁력 제고

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2013년(1년)

○ 위    치 : 동해시 공단3로 30(구호동 243-10)

○ 시설규모 : 1동/2층(건축면적 653.25㎡, 연면적 897.41㎡)

○ 사 업 비 : 1,053백만원(국비273 도비81, 시비191 자담 508)

○ 시설내용 : HACCP가공공장, 제품보관실, 포장실 등

○ 2013년 사업비 : 1,053백만원(국비273 도비81, 시비191 자담 508)

▢ 추진상황

○ 착    공 : 2013. 8. 12

○ 준    공 : 2014. 1. 7

▢ 기대효과

○ 노후□재래식 수산물 가공시설을 현대적 시설로 위생적이고 안전한 수산물의 공급을

통한 국민보건 향상

○ 지역 내 특화된 수산물 가공산업 활성화를 통한 지역 선도산업 발전 육성으로 지역

경제 활성화

▢ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년
사업비	1,053	-	-	1,053

Ⅰ		동해문화원 신축공사

▢ 사업목적

○ 문화기반시설 확충을 통한 시민 문화 욕구 충족

○ 문화원 이전 신축을 통한 민원 해소 및 다양한 문화교실 운영

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2011∼2014

○ 위    치 :  동해시 천곡동 809-22

○ 사업내용 : 사무실, 원장실, 문화학교 강의실, 다목적 강당등

○ 2013년 사업비 : 800백만원(시비)

▢ 추진상황

○ 2009.8.17.：동해문화원 이전 식축 계획 보고

○ 2010.4.16.：지방재정 투융자 심사 완료

○ 2010.10.27.：공유재산 관리계획 의회 승인

○ 2012.8.31.：동해문화원 사업계획 변경 승인

○ 2013.9.23.：동해문화원 신축공사 착공

○ 2014.12.02.：동해문화원 신축공사 준공 예정

▢ 기대효과

○ 이전 신축을 통한 민원 해소 및 다양한 문화활동 가능

○ 지역 문화 활동 거점 역할 기대

▢ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교 (단위 : 백만원)
	합계	2011년이전	2012년	2013년	2014년
사업비	3,400	500	500	800	1,600